사업명

찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업

(산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)

담당자

관광과 조민우(☎639-4183)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산달연륙교 준공 후 문화·관광 인프라 부족으로 외부관광객 유입 미흡한       실정으로, 본 사업을 통한 관광자원 확보로 섬주민의 새로운 성장 동력 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 거제시 거제면 법동리(산달도)

○ 규 모 : 산달분교 리모델링 및 캠핑장 조성, 달빛타워 조성, 주민역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500	1,210	730	560	-
국 비	2,000	968	584	448	-
시 도 비	250	121	73	56	-
시군구비	250	121	73	56	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2019. 12. : 산달 분교 리모델링 및 캠핑장 조성 완료

○ 2021. 06. : 주민 역량 강화 용역 완료

○ 2021. 06. : 달빛타워 조성공사 착공

○ 2022. 06. : 달빛타워 조성공사 준공

□ 향후계획

○ 2022. 07. : 달빛타워 위탁계약

사업명

산달도 해안도로 정비사업

담당자

관광과 조민우(☎639-4183)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산달도 연륙교 준공으로 인한 섬 지역 내 협소한 도로폭 정비로 주민교통       편의 제공 등 생활 기반 여건 개선 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 거제시 거제면 법동리(산달도)

○ 규 모 : 해안도로 확장 L=2.0km B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	1,670	490	250	590
국 비	2,400	1,336	392	200	472
시 도 비	300	167	49	25	59
시군구비	300	167	49	25	59

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2019. 08. ~ 12. : 1차 구간(L=244m) 착공 및 준공

○ 2019. 08. : 2차 구간 실시설계용역 착수

○ 2020. 01. ~ 12. : 2차 구간 편입토지 보상

○ 2021. 05. ~ 2022. 06. : 산달도 해안도로 2차 구간 착공 및 준공

□ 향후계획

○ 2022. 07. ~ 12. : 잔여 구간 편입토지 보상

○ 2023. 01. ~ 12. : 전체구간(잔여 구간) 공사착공 및 준공

사업명

흥남 철수 기념 공원 조성사업

담당자

관광과 황경구(☎639-4194)

□ 사업목적 및 필요성

○ 흥남철수작전을 콘텐츠로 한 국내 유일의 인도주의적 테마 공원 조성으로       세계적인 관광인프라를 구축하고 포로수용소유적공원과 연계한 6.25역사        스토리텔링 관광루트 개발로 남해안 관광 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년~2024년(5년간)

○ 위 치 : 거제시 장승포동 687번지 일원

○ 규 모 : 17,964㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,000	-	28	5,462	9,510
균특(전환)	7,500	-	14	2,731	4,755
시 도 비	2,250	-	4	819	1,427
시군구비	5,250	-	10	1,912	3,328

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 12. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료

○ 2018. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사 승인

○ 2020. 12. : 제4차 전국 항만기본계획 변경

○ 2021. 08. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(공공건축지원센터)

○ 2022. 02. : 공공건축심의위원회 심의 완료

○ 2022. 03. : 건축 리모델링 실시설계 발주

○ 2022. 04. : 전시 공모 계약 체결 및 시행

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 건축 구조보강 공사착공

○ 2022. 10. : 전시 시설 제작 및 설치 공사착공

○ 2023. 01. : 건축 리모델링 공사착공

사업명

도장포 관광버스 주차장 설치

담당자

관광과 정용완(☎639-4193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한려해상국립공원 명소인 「바람의 언덕」의 주차장 부족에 따른 교통체증 유발로 지역주민 및 관광객 불편 가중, 주차환경 개선을 통한 주차 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년~2024년(5년간)

○ 위 치 : 거제시 남부면 갈곶리 309-1번지 일원

○ 규 모 : 14,139㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,000	117	116	87	11,680
국비(균특)	6,000	59	58	33	5,850
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,000	58	58	54	5830

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 12. : 기본구상 및 타당성 조사 용역

○ 2020. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사

○ 2020. 11. : 도시관리계획(교통시설 : 주차장) 결정

○ 2021. 08. : 실시설계용역 추진

○ 2022. 01. : 보상계획 열람 공고

○ 2022. 05. : 편입토지 등 손실 보상 협의

□ 향후계획

○ 2022. 09. : 소규모환경·재해 영향평가 시행

○ 2022. 12. : 도시계획시설사업 실시 계획 인가 승인

사업명

어린이교통공원 조성

담당자

교통과 윤진애(☎639-4545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통안전 체험 및 교육을 통한 어린이 교통사고 예방

○ 올바른 교통문화 습득 및 생활화를 통하여 시민 교통문화 수준 상향

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018. 08. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 일원

○ 규 모 : 4,293㎡실내교육장 600㎡(연면적 997.64㎡), 실외교육장 1,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,500	4	431	3,065	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,500	4	431	3,065	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2020. 06. : 어린이교통공원 조성사업 계획부지 변경 검토

○ 2020. 07. : 건축기획용역 시행

○ 2020. 09. : 공유재산심의회 심의 완료, 지방재정투자심사 완료

○ 2020. 10. : 건축기획 심의, 설계공모 공고

○ 2020. 11. : 공유재산 관리계획, 중기지방재정계획 반영

○ 2021. 02. : 공모 당선작 선정 및 주민설명회 개최, 실시설계 시행

○ 2021. 08. : 공원조성계획 결정(변경) 완료

○ 2021. 11. : 실시계획인가

○ 2021. 12. : 실시설계용역 및 진입로 교량설치공사 완료

○ 2022. 01. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 당초 2022년 3월⇒2022년 12월 변경(행정절차이행 등 반영)

사업명

사업용차량 공영주차장 조성

담당자

교통과 김승호(☎639-4563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업용차량의 도심 인근 주차장소 제공을 통한 운송사업자 애로 해소

○ 조선 물류 활성화를 통한 관내 조선사 및 협력업체 경영 효율화 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위 치 : 사등면 사곡리 산103-54번지 일원

○ 규 모 : 95대(대형 71대, 소형 24대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,720	2,060	2,130	3,530	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,720	2,060	2,130	3,530	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2019. 04. : 사업용차량 공영차고지 대체입지 타당성조사 용역 완료

○ 2019. 06. : 공유재산심의회 승인, 투융자 심사

○ 2019. 09. : 주민의견 청취, 공유재산관리계획 의결

○ 2020. 01. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정

○ 2020. 06. : 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 발주

○ 2021. 04. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경) 고시

○ 2021. 10. : 도시계획시설 실시계획 인가신청 및 인가고시

○ 2021. 12. : 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 준공

사업명

거제시 ITS 고도화 사업

담당자

교통과 구완솔(☎639-4564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 실시간 온라인 신호제어 신호운영 효율성 향상

○ 교차로 혼잡 개선으로 원활한 차량소통 및 교통안전성 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 3. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 거제대로 등 9개로 50.3km

○ 규 모 : 첨단신호제어시스템(제어기교체 및 신호 온라인 110개소) 1식,

스마트교차로시스템 14식, 감응신호시스템 6식, 센터시스템 개발 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,400	-	-	3,400	-
국 비	2,040	-	-	2,040	-
시 도 비	136	-	-	136	-
시군구비	1,224	-	-	1,224	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021. 08. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 실시설계 준공

○ 2022. 05. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 감리용역 계약

□ 향후계획

○ 2022. 07. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 계약

○ 2022. 12. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 시스템 시범운영

사업명

거제시종합사회복지관 이전 신축

담당자

노인장애인과  강승필(☎639-3792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 종합사회복지관과 장애인복지관의 분리 운영을 통해 장애인에 대한 적기 맞춤형 재활프로그램 서비스 지원하고 종합사회복지관에는 다양한 계층에 서비스를 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 양정리 1094-3번지 외 2필지

○ 규 모 : 연면적 2,997㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,400	152	320	5,005	3,923
국 비	1,553	-	-	1,553	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,847	152	320	3,452	3,923
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 04. 거제시종합사회복지관 이전 신축 확정

○ 2020. 12. 주민설명회 개최

○ 2021. 10. 경남 지방재정투자 심사

○ 2021. 10. 기획재정부 복권위원회 복권수익금 지원 1,553백만원 확정

○ 2021. 12. 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2022. 02. 착공

○ 2023. 05. 준공

□ 사업변경 내역

(단위 : ㎡)

구 분	당초	현재	변경사유
사 업 량	3,500	2,997	- 실시설계 완료에 따른 연면적 변경

사업명

장승포동 다어울림 행복문화센터 건립

(생활SOC복합화사업)

담당자

노인장애인과  이시준(☎639-3794)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장승포동 다어울림 행복문화센터(생활SOC복합화사업) 건립을 통한 문화‧체육‧복지시설에 대한 주민 만족도 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년

○ 위 치 : 거제시 마전8길 15(마전동) 일원

○ 규 모 : 대지면적 2,279㎡ / 연면적 1,700㎡ (지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,114백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,114	-	445	499	6,170
국 비	2,100	-	8	187	1,905
시 도 비	130	-	3	56	71
시군구비	4,884	-	434	256	4,194
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 11. 거제시 공유재산 관리 계획 승인

○ 2021. 05. 공공건축 심의위원회 심의

○ 2021. 06. 주차장 매입 부지 감정평가 손실보상 협의

□ 향후계획

○ 2022. 02. 거제시 도시계획위원회 심의

○ 2022. 04. 실시설계 공모

○ 2023. 03. 실시설계용역 완료, 공사계약 및 착공

○ 2024. 05. 준공

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당초	현재	변경사유
총사업비	6,600	7,144	- 주차부족 문제 및 도시계획 변경으로 인한 토지 추가 매입액 514백만원 반영

사업명

거제섬꽃축제

담당자

농업관광과 양희은(☎639-6443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업과 문화·예술, 가을꽃이 어우러지는 시민과 함께 만드는 축제 구현

○ 지역특성의 관광 자원화 및 관광객 유치로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년 개최(10월 말 ~ 11월 초, 9일간)

○ 위 치 : 거제시농업개발원(거제시 거제면 거제남서로 3577)

○ 규 모 : 가을꽃 전시 등 6개분야 62종 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,363백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,363	345	166	452	400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	93	56	-	37	-
시군구비	1,240	259	166	415	400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	30	30	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 10. 26. ~ 11. 03. 제14회 거제섬꽃축제 개최

○ 2020. 10. 31. ~ 11. 08. 제15회 거제섬꽃축제 가을꽃전시회

○ 2021. 10. 30. ~ 11. 14. 거제시농업개발원 가을꽃전시

□ 향후계획

○ 2022. 10. 29. ~11. 6. 제16회 거제섬꽃축제 개최

사업명

거제식물원 주변 인프라 구축 공공용지 취득

담당자

농업관광과 김성현(☎639-6422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제식물원 주변 농업연구시설 확대와 신활력 플러스 사업, 식물원 사막관

조성 및 주차장 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 01. ~ 2024. 12.(4년간)

○ 위 치 : 거제시 거제면 서정리 908-1 일원

○ 사업량 : 39필지 28,714㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,800	-	200	2,400	3,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,800	-	200	2,400	3,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2020. 05. 거제식물원 주변 인프라구축 공공용지 취득 계획수립

○ 2021. 05. 공공용지 취득 편입부지 감정평가

○ 2021. 07. 공공용지 편입부지 매입(1필지 918㎡)

□ 향후계획

○ 2022. 07. ~ 대상 부지 토지주와 지속적 협의 매입

사업명

반려동물 놀이터 조성공사

담당자

농업정책과 김명환(☎639-6365)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반려견놀이 공간이 부족하여 비반려인과 다수 분쟁 발생으로 이를 해결

하고 반려동물 문화확산에 따라 시민의 눈높이를 맞추기 위해 반려동물

놀이터 조성공사를 추진함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2026. 09.

○ 위 치 : 거제시 사등면 사곡리 산 87번지 일원

○ 규 모 : 반려동물놀이터 4,822㎡ , 도로 723m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,414 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,414	34	253	1,147	980
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	150	-	70	80	-
시군구비	2,264	34	183	1,067	980
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30 %)

○ 반려동물 놀이터 조성 착공(21.9.)

○ 반려동물 놀이터 진입도로(소로3-25호선) 개설공사 1차분 착공(21.9.)

□ 향후계획

○ 반려동물 놀이터 및 진입도로 1차분 준공(22.12.)

○ 반려동물 놀이터 진입도로(소로3-25소선) 개설공사 2차분 착공(23.1)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 참고자료 참조

사업명

거제시농업기술센터 청사이전

담당자

농업정책과 유은경(☎639-6315)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정기관 분산으로 인한 행정능률 저하를 해소하여 효율적인 조직 운영체계를 구축하고 시설 현대화 및 고도화로 거제 농업의 중추적 역할 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2022

○ 위 치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 29,401㎡, 건축연면적 4,654㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,220	4,908	1,503	12,809	-
국 비	4,047	224	988	2,915	-
시 도 비	1,089	45	231	829	-
시군구비	14,084	4,759	284	9,064	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017. 12. : 기본계획 수립

○ 2019. 03. : 지방재정투자심사

○ 2019. 09. : 도시관리계획(용도지역·구역, 시설:공공청사) 변경

○ 2020. 05. : 설계공모 선정

○ 2021. 04. : 실시계획인가 고시

○ 2021. 11. : 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

○사업비 변경내역

당초	변경	증감액	비고
16,020	19,220	3,200

사업명

먹거리통합지원센터(공공급식지원센터)건립

담당자

농업지원과 정은래(☎639-6522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 먹거리 순환체계 구축을 위한 장기적 비전 제시 및 계획, 생산,

공급, 유통, 폐기 등 거제시 공공급식 추진방향 설정 및 운영 방안 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원

○ 규 모 : 먹거리통합지원센터 건립 지상 2층(건축연면적 2,566㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	-	80	570	2,850
시 도 비	2,275	-	80	570	1,625
시군구비	1,225	-	-	-	1,225

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 건축설계 공모: 2020. 01.

○ 공공급식지원 지원 조례 제정 : 2020. 02.

○ 실시설계 및 인허가: 2020. 06.

○ 먹거리통합지원센터 운영 최종 보고회: 2020. 10.

○ 실시계획 인가 승인: 2021. 03.

○ 먹거리통합지원센터 착공: 2021. 11.

□ 향후계획

○ 먹거리통합지원센터 준공: 2022. 12.

○ 먹거리통합지원센터 운영: 2022. 03.

□ 사업변경 내역(해당없음.)

사업명

고현동 로컬푸드 복합커뮤니티 건립

담당자

농업지원과 이미덕(☎639-6783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 생활 편익시설과 연계한 문화 복합형 직매장 건립을 통한 로컬푸드

생산·소비체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 01. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 거제시 고현동 1068-8

○ 규 모 : 지상 3층 1,000㎡

○ 시 설 : 로컬푸드 직매장, 북카페, 사무실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	-	-	3,000	-
시 도 비	1,500	-	-	1,500	-
시군구비	1,500	-	-	1,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 추진계획 수립 : 2020. 10.

○ 주민간담회 및 설명회 : 2021. 04.

○ 건축기획 용역 : 2021. 12.

○ 실시설계 및 인허가 : 2022. 04. ~ 08.

□ 향후계획

○ 공사 착공 : 2022. 08.

○ 공사 준공 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당없음.)

사업명

ICT기반 식생활 증진 시스템 구축

담당자

농업지원과 유성민(☎639-6523)

□ 사업목적 및 필요성

○ ICT기반의 디지털 체험형 영양교육 프로그램을 통해 식생활 교육 연속성과

학교 수업 정규과정 편입을 위한 전문화된 먹거리 교육 기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 거제시 둔덕면 거림리 363-2 (구)둔덕초 폐교

○ 규 모 : ICT기반 식생활 증진 시스템 구축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	-	-	-	10,000
국 비	7,000	-	-	-	7,000
시 도 비	1,500	-	-	-	1,500
시군구비	1,500	-	-	-	1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 추진계획 수립 및 사업신청 : 2022. 03.

□ 향후계획

○ 실시설계 및 인허가 : 2023. 01.

○ 착공 및 준공 : 2023. ~ 2025.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

도란도란 컬쳐 앤 푸드센터 건립

담당자

농업지원과 이미덕(☎639-6783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 생활 편익시설과 연계한 문화 복합형 직매장 건립을 통한 로컬푸드

생산·소비체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 거제시 아주로 3길 7

○ 규 모 : 지상 3층 1,300㎡

○ 시 설 : 로컬푸드 복합센터(직매장,북카페), 생활문화센터(주민자율공간,                 주민공동체공간, 공유부엌, 사무실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,800	-	-	700	3,100
국 비	1300	-	-	200	1,100
시 도 비	240	-	-	60	180
시군구비	2,260	-	-	440	1,820

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 생활soc복합화사업 업무계약 체결 : 2022. 01.

○ 건축기획 용역 : 2022. 02.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 : 2022. 06.

□ 향후계획

○ 건축 설계 공모 : 2022. 7. ~ 10.

○ 실시설계 및 인허가 : 2022. 11.

○ 공사 착공 : 2023. 01.

○ 공사 준공 : 2023. 12.

사업명

거제 동서간 연결도로 건설

담당자

도로과 오용규(☎639-4473)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거가대교 개통으로 인한 교통량 증가로 시 관내 도로기능 마비 해소와

동서지역의 원활한 소통 및 물류수송 기반구축과 지역간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ～ 2021

○ 위 치 : 상동동 ～ 거제면 명진리

○ 규 모 : 도로개설 L=4.06Km(접속도로 L=2.46Km, 터널 L=1.6Km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 74,978백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	74,978	47,176	26,002	1,800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	74,978	47,176	26,002	1,800	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2012. 08. : 입찰방법 심의

○ 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2015. 05. : 보상협의회 개최

○ 2015. 09. : 도로구역 결정 고시

○ 2016. 07. : 공사 착공

○ 2022. 04. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 2022. 07. : 시설물 이관 (거제시→진주국토관리사무소)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

관포IC~임호간 도로확포장(시도12호선)

담당자

도로과 김형진(☎639-4623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저도 개방과 더불어 농소해수욕장을 방문하는 교통량 증가로 도로의 선형       개량과 회전교차로 설치로 교통불편 해소 및 관광 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 10. ~ 2030. 12.

○ 위 치 : 장목면 관포IC ~ 농소해수욕장

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.54㎞, B=13.25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	28,000	8,256	671	1,503	17,570
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	380	380	-	-	-
시군구비	27,620	7,876	671	1,503	17,570
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 40%)

○ 2015. 01. : 실시설계용역 완료

○ 2016. 01. : 보상계획 열람공고 및 실시계획인가(1공구)

○ 2016. 03. : 도로구역 결정 고시

○ 2019. 09. : 1공구 착공(농소해수욕장 일원 L=399.0m)

○ 2020. 05. : 1공구 준공

○ 2020. 12. : 보상계획 열람공고(2공구)

○ 2021. 11. : 도로구역 결정(변경) 고시

□ 향후계획

○ 2022. 05. : 2공구 착공(L=400.0m, 회전교차로 1식)

○ 2023. 06. : 잔여구간 사업계획 수립

○ 2023. 11. : 2공구 준공

사업명

와현~예구간(농어촌도로 101, 302호선) 도로정비공사

담당자

도로과 이숙주(☎639-4624)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제 9경인 공곶이 진입도로의 노폭 협소 및 심한 굴곡으로 교통사고 위험 및 성수기 교통체증 심화로 지역주민과 관광객 통행불편 초래

○ 도로의 노폭 확충, 선형 개량 등 기반시설을 확충으로 원활한 차량 통행 및 관광수요 증가로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 일운면 와현리 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 및 굴곡도로 개량 L=1.92㎞, B=8.0m ~ 10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,675백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,675	650	140	1,502	3,383
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,675	650	140	1,502	3,383
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 15%)

○ 2019. 09. : 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 09. : 편입토지 등 손실보상 협의

○ 2021. 11. : 도시관리계획 결정(변경) 및 노선지정(변경) 공고

○ 2021. 12. : 실시설계용역 완료 및 실시계획인가 고시

□ 향후계획

○ 2022. 05. : 착공

○ 2022. 08. : 토지수용재결(3명) 신청(지방토지수용위원회)

사업명

지방도1018호선(용산교차로~삼룡초교앞)

도로확포장

담당자

도로과 김형진(☎639-4623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 출ㆍ퇴근 시간 상동교차로 이용 차량 증가로 상습교통 정체 발생

○ 거제 동서간 연결도로 개통과 상문동 지역 유입인구 증가로 정체 심화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 용산교차로(상문동주민센터) ~ 삼룡초교 앞(대로3-9호선)

○ 규 모 : 도로 확포장 L=800m, B=35.0m(4차로→6차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,000	-	-	1,500	7,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,000	-	-	1,500	7,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 계획수립, 5%)

○ 2020. 09. : 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 10. : 시 지방재정투자심사(적정)

□ 향후계획

○ 2022. 01. : 보상계획 열람 공고

○ 2022. 03. : 감정평가(도로 좌측 농지구간) 시행

○ 2022. 03. : 도로공사 편입토지 등 손실보상협의 통보

○ 2022. 07. : 도로구역 결정(변경) 및 실시계획인가 협의

○ 2023. 01 : 감정평가(도로 우측 구간) 시행 및 보상 협의

○ 2024. 01. : 공사 착공

○ 2025. 12. : 공사 준공

사업명

상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설(양정마을~안압지)

담당자

도로과 김동희(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.01.~2022.07.

○ 위 치 : 양정마을~양정저수지~안압지

○ 규 모 : 도로개설 L=2,097m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,728백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	40,728	34,593	5,140	995	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	21,858	17,803	3,740	315	-
지 방 채	2,300	2,300	-	-	-
민간자본	15,670	13,990	1,000	680	-
기 타	400	-	400	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2017. 09. : 2공구 준공 양정마을~양정초교(L=540m, B=25m)

○ 2019. 08. : 4공구 공사 착공(아이파크2차~안압지)

○ 2020. 01. : 1-1공구 준공 양정초교~양정저수지(L=380m, B=25m)

○ 2020. 06. : 4공구 1차분 준공

○ 2021. 12. : 4공구 3차분 착공

○ 2022. 05. : 4공구 2차분 준공

□ 향후계획

○ 2022. 07. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업 기간 당초 2022년4월⇒2022년7월 변경

사업명

상동도시계획도로(대로2-2, 중로1-24호선) 확장

담당자

도로과 김동희(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.04.~2022.04.

○ 위 치 : 웰빙공원 ~ 용산교차로

○ 규 모 : 도로확장 L=940m, B=10~15m 확장, 용산교차로 개선

- 대로2-2호선 L=730m, B=30m(15m확장)

- 중로1-24호선 L=210m, B=20m(10m확장)

- 중로1-5호선 L=100m, B=30m(용산교차로 개선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,370백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,370	2,000	2,370	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,370	2,000	2,370	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2020. 04. : 중로1-5, 1-24호선 공사 착공

○ 2021. 02. : 대로2-2호선 착공

○ 2021. 06. : 중로1-5, 1-24호선 개통

○ 2021. 12. : 대로2-2 개통

□ 향후계획

○ 2022. 04. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 변경없음

사업명

상동1초교 진입도로(중로2-24,소로1-64호선) 개설

담당자

도로과 김동희(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신설 중인 상동1초교 학생들의 안전한 보행환경 구축

○ 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충

○ 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.01.~2023.03.

○ 위 치 : 상동동 1033번지 일원(상동동 대동다숲아파트 옆)

○ 규 모 : 도로 개설 L=530m, B=10~15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,328백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,328	1,600	2,207	1,000	521
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,807	1,600	2,207	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,521	-	-	1,000	521
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2019. 04. : 상동1초 중앙투자심사 조건부 결정

○ 2019. 05. : 상동1초 개설을 위한 업무협의 참석(거제시, 거제교육지원청)

○ 2019. 09. : 실시설계용역 발주

○ 2020. 03. : 손실보상 열람 공고

○ 2020. 03. : 실시설계용역 준공

○ 2021. 04. : 손실보상협의 완료

□ 향후계획

○ 2022. 06. : 상동4지구 2블럭 공동주택사업자 공사 착공

○ 2023. 03. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 민간사업비 1,521백만원 증가

사업명

도시활력증진지역 개발사업

담당자

도시계획과 박중환(☎639-4434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴한 장승포동 지역상권 회복과 도심환경 개선을 통한 자주적 관광인프라 구축 및 활력도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2025년

○ 위 치 : 장승포항 일원

○ 규 모 : L=2㎞, 2.15㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,985	3,945	-	185	1,855
국 비	1,972.7	1,972.7	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,012.7	1,972.7	-	185	1,855
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 2017. 01. ~ 2020. 12. : 장승포항 야간경관 특화사업(1단계~4단계) 완료

○ 2022. 05. : 야간경관조명시설물 콘텐츠 디자인개발 및 실시설계용역, 맛있는   거리 조성 운영 용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 야간경관조명시설물 콘텐츠 디자인개발 및 실시설계용역 완료

○ 2022. 09. : 맛있는 거리 조성 운영 용역 완료 및 야간경관조명시설물 콘텐츠 설치공사 발주

□ 사업변경 내역

사업명	예산(백만원)		기간		비고
도시활력증진지역 개발사업	당초	변경	당초	변경
	6,000 (국 3,000 / 시 3,000)	6,000 (국 1,980 / 시 4,020)	2017 ~ 2020	2017 ~ 2025

○ 2022. 1. : 사업계획 변경 신청서 제출(국토교통부) ⇨ 승인완료

사업명

2019년 능포지구 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 김경윤(☎639-4614)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전․위생 등 긴요한       생활인프라 확충 및 주거환경개선, 주민역량강화 등 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 능포동 355-1번지 일원

○ 규 모 : A=38,240㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,657백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,657	526	374	1,757	-
국 비	1,860	483	224	1,153	-
시 도 비	239	29	19	191	-
시군구비	558	14	131	413	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48.1%)

○ 2019. 04. : 공모사업 선정

○ 2019. 08. : 지방재정 투자심사 승인

○ 2020. 09. : 마스터플랜 조건부 승인

○ 2021. 03. : 실시설계용역 착수

○ 2021. 10. : 옥명 꽃마을 문화센터 조성사업 착공

○ 2022. 06. : 새뜰마을 위생개선사업 및 담장없는 골목길 보행안전사업 착공

□ 향후계획

○ 2022. 07.~ 2022. 12. : 단위사업별 공사 착수 및 완료

○ 2022. 12. : 새뜰마을사업 완료

사업명

거제 시립박물관 건립

담당자

문화예술과 김사모아(☎639-3403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역역사의 조명 및 기록의 보존․관리로 역사의 교육의 장 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 11. ∼ 2024. 12.

○ 위 치 : 거제시 둔덕면 거림리 329-6번지 외 3필지

○ 규 모 : 박물관 건립 1식(건축연면적 : 3,400㎡, 지하1층/지상2층)

- 상설전시실, 기획전시실, 체험실, 사무실, 수장고, 학예연구실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,634백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,634	482	-	390	8,762
국 비	156	-	-	156	-
시 도 비	3,542	-	-	-	3,542
시군구비	5,376	92	-	234	5,050
기 타	560	390	-	-	170

□ 추진상황(추진진도 : 15%)

○ 2018. 11. : 공립박물관 건립 사전평가 통과(적정)

○ 2019. 10. : 도 지방재정투자심사 완료

○ 2021. 08. : 국비(균특) 156백만원 반영(2022년)

□ 향후계획

○ 2022. 07. : 거제시 도시관리계획 결정 입안서 제출

○ 2022. 08. : 경상남도 도시관리계획 결정(변경) 신청(시→도)

○ 2022. 11. : 경상남도 도시관리계획(문화시설: 박물관) 결정 완료

○ 2022. 11. ~ 2023. 05. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2023. 06. ~ 08. : 건축협의 등 관련 인·허가 완료

○ 2024. 12. : 박물관 개관

사업명

거제 옥포대첩 축제

담당자

문화예술과 정은주(☎639-3393)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임진왜란 제429주년을 맞아 충무공 이순신 장군의 육·해상 첫 승전 기념

□ 사업개요

○ 기간 : 2021년 5월 ~ 6월

○ 위치 : 옥포대첩기념공원 및 거제시 일원

○ 내용 : 제례봉행, 비대면 백일장, 비대면 사생대회

○ 주관 : 거제향교, 한국문협 거제지부, 한국미협 거제지부

○ 사업비 : 12백만원

※ 당초 사업비 260백만원, 코로나19로 축소 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12	-	12	-	-
시군구비	12	-	12	-	-

□ 추진상황(추진진도 : 100%)

○ 2021. 03. : 제59회 거제 옥포대첩 축제 추진 방안 검토보고

(코로나19 확산방지를 위해 제례봉행과 비대면 가능 행사만

시행, 당초 사업비 260백만원중 248백만원 삭감)

○ 2021. 06. 16. : 제례봉행 거행

○ 2021. 05. ~ 06. : 백일장 및 사생대회 공모전

사업명

거제문화예술회관 무대설비시설 개선공사

담당자

문화예술과 정은주(☎639-3393)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공연장 무대기계 노후(19년 경과)로 안전검사와 전문컨설팅 결과 전면 교체가

필요하다고 진단, 시설 개선공사를 통해 공연자 및 관람객 안전성 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 거제시 장승로 145 거제문화예술회관

○ 기    간 : 2021년 ~ 2024년

○ 사 업 비 : 68억원(도비 20억원, 시비 48억원)

○ 사업규모 : 대극장(1,209석/861㎡) 및 소극장(424석/240㎡)

○ 사업내용 : 대극장 및 소극장 무대설비 일체 개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 68백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,800	20	200	-	6,580
국비(전환)	2,000	-	-	-	2,000
시군구비	4,800	20	200	-	4,580

□ 추진상황

○ 2020. 06. : 무대설비 시설개선 기본계획 용역(예술재단)

○ 2020. 09. : 거제시 지방재정 투자심사

○ 2020. 12. : 2021 중기 지방재정계획 반영

○ 2021. 06. ～ 09. : 대극장 무대설비 시설개선 실시설계

○ 2021. 08. : 지방이양 도자율 예산 지원 신청

□ 향후계획

○ 2022. 03. : 도 지방재정 투자심사

○ 2022. 07. ～ 12. : 지방이양 도자율 예산 지원 신청·확보 등 사전철차 이행

○ 2023. 03. ～ 12. : 대극장 무대설비 개선공사

○ 2023. 03. ～ 07. : 소극장 무대설비 시설개선 실시설계 용역

○ 2024. 03. ～ 10. : 소극장 무대설비 시설개선공사

사업명

다목적 어업지도선 건조사업

담당자

바다자원과 배영정(☎639-4283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 행정선 신규 건조로 운항 안전성 확보 및 유지 관리비 절감

○ 각종 재난과 적조방제, 행정지원 등 신속한 컨트롤 타워 기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 거제시 해역 일원

○ 규 모 : 지도선 건조 1척(30톤급)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,800	-	-	300	3,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,800	-	-	300	3,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2022. 03. : 국비 확보를 위한 중앙부처 방문

○ 2022. 05 : 거제시 제1회 추가경정 예산편성 요구

□ 향후계획

○ 2022. 09. ~ 2023. 01. : 지도선 건조 기본 및 실시설계

○ 2023. 02. ~ 2024. 11. : 건조공사 착공 및 준공

사업명

(전국)바다의 날 기념행사 지원

담당자

바다자원과 문지혜(☎639-4303)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제26회 바다의 날을 맞아 국민들에게 바다의 중요성을 널리 알리고 진취적인 기상과 해양개척 정신을 함양하고 화합의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1월 ~ 6월(행사일 : 2021. 6. 4.)

○ 위 치 : 거제시 일운면 지세포해양공원

○ 규 모 : 350명 참석(국무총리, 해양수산부장관, 경남도지사, 거제시장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	258	-	258	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	258	-	258	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%) : 완료

○ 2021. 1월 ~ 3월 : 행사추진계획 수립 및 용역

○ 2021. 4월 ~ 5월 : 행사대행사 선정, 홍보

○ 2021. 6월 : 행사추진

- 식전행사 : 기념식 행사 전 홍보영상, 문화공연 실시

- 기 념 식 : 축하 릴레이영상, 환영사 및 축사, 유공자 포상 및 기념사(총리)

- 첨단 해양산업 특별전시회, 반려해변 협약식, 해상퍼포먼스, 해양사진대전 특별전시, 거제시 주제관 및 수산물 홍보부스 운영, 바다의 날 기념 세미나 등

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

치유의 숲 조성사업

담당자

산림녹지과 김재현(☎639-4353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시화·산업화 영향으로 만성질환과 환경성 질환이 증가함에 따라 효과적인 치유수단으로 산림치유에 대한 관심 증대 및 수요 증가

○ 산림을 활용하여 시민 건강증진과 심신 함양을 도모하고 더불어 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023. 3.

○ 위 치 : 거제시 삼거동 산151-1번지 일원

○ 규 모 : 치유의 숲 조성 (59.9ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,670	852	418	2,900	1,500
국 비	300	91	209	-	-
시 도 비	2,950	27.3	62.7	1,885	975
시군구비	2,420	773.7	146.3	1,015	525
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)

○ 21. 01. : 치유의 숲 조성사업 대상지 변경 (동부면 구천리 산96 → 삼거동 산151-1)

○ 21. 01. : 치유의 숲 조성을 위한 국유림 대부 사전 협의

○ 21. 05. : 치유의 숲 타당성 평가 용역 완료

○ 21. 10. : 치유의 숲 기본계획 및 실시설계, 각종 평가 및 조사 완료

○ 21. 11. : 국유림 사용허가 및 산지전용신고 (함양국유림관리소)

□ 향후계획

○ 22. 07. : 치유의 숲 조성사업 조성계획 승인

○ 22. 07. ~ 23. 03. : 치유의 숲 조성사업 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업 기간 변경 : 당초 21. 02. ~ 22. 06. → 변경 21. 02. ~ 23. 03.

↳ 행정기관 협의 지연에 따라 사업기간 변경

사업명

고현근린공원 조성사업

담당자

산림녹지과 김우성(☎639-4383)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고현·장평동 인구 밀집지역 도시공원 조성으로 쾌적한 휴식 공간 제공

○ 장기미집행 도시공원 일몰제 대상 근린공원 집행계획임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년

○ 위 치 : 고현동 산59-3번지 일원

○ 규 모 : 부지면적(180,264㎡)

- 토지보상 : 44필지, 대상자 77인

- 조성공사 : 산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,935백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,935	-	-	100	3,835
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,935	-	-	100	3,835
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2022. 06. 도시관리계획 결정(변경) 용역 및 소규모환경영향평가 용역 시행

□ 향후계획

○ 2022. 06. ~ 12. : 도시관리계획시설(시설:근린공원) 결정 용역

○ 2022. 06. ~ 12. : 고현근린공원 재해 영향성 검토 용역

○ 2022. 01. ~ 06. : 고현근린공원 공원조성계획 용역

○ 2023. 01. ~ 12. : 고현근린공원 손실보상협의 추진

○ 2024. 01. ~ 12. : 고현근린공원 기본 및 실시설계 용역

○ 2025. 01. ~ 12. : 고현근린공원 조성 사업

사업명

양정근린공원 조성사업

담당자

산림녹지과 정양효(☎639-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원으로서 지역주민의 휴게공간 및 자연친화형 공원으로 조성하여 건강한 도시생활을 확보하고 공공의 복리를 증진시키고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년

○ 위 치 : 양정동 903-21번지 일원(수월힐스테이트@ 옆)

○ 규 모 : 공원조성 A=10,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,806백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,806	476	-	-	4,330
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,806	476	-	-	4,330
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 편입토지 일부 협의보상 완료

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공원 편입토지 중 군부대 이전사업으로 국방부 소유 토지 거제시 이관

○ 2023. 01. : 잔여 편입토지 보상 추진

○ 2023. 03. : 실시계획인가 및 실시설계용역

○ 2025. 01. ~ 2025. 05.: 공사 착공 및 준공

사업명

아주근린공원 조성사업

담당자

산림녹지과 정양효(☎639-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아주·아양 지역의 주민들의 여가시간 확대와 운동·산책 등 웰빙 문화  확산 반영을 위한 공원녹지 공간 조성이 필요함

□ 사업개요

○ 공원명 : 아주 제2근린공원

○ 기  간 : 2022. ~ 2023.

○ 위  치 : 아주동 산171-11번지외 1필지 일원

○ 규  모 : 부지면적(21,986㎡)

- 토지보상 : 2필지(국·공유지)

- 조성공사 : 공원 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,300	-	-	1,400	1,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,300	-	-	1,400	1,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021. 08. 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행

□ 향후계획

○ 2022. 09. 실시설계 용역 시행

○ 2023. 03. 실시계획 인가

○ 2023. 05. ~ 2023. 11. 공사 착공 및 준공

사업명

관내 배수지 위생관리 개선사업

담당자

상하수도과 강석현(☎639-4893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 배수지 시설 및 주변 위생관리 상태, 배수지 내부 시설물 개선을 통해 유충사고 등을 사전 예방

□ 사업개요

○ 기   간 : 2021. 01. ~ 2022. 12.

○ 위   치 : 관내 배수지 17개소

○ 사업내용: 배수지 내부 개보수 및 라이닝 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,644백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,644	2,656	2,656	3,988	-
국 비	3,322	1,328	1,328	1,944	-
시군구비	3,322	1,328	1,328	1,944	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018. 10. : 거제시 노후배수지 정밀조사 용역 완료

○ 2020. 12. : 21년도 보조사업 예산 확정

○ 2021. 03. : 위생관리 개선사업 내역 조정 확정(66억원)

○ 2021. 10. : 위·수탁 협약(시 ↔ k-water)

○ 2022. 04. : 위생관리 개선사업 내역 조정(66억원 → 76억원)

○ 2022. 05. : 실시설계 용역 착수, 배수지 보수 착수(1차분)

□ 향후계획

○ 2022. 09. : 2차분 사업추진

○ 2022. 12. : 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 배수지 내부보수 수량증가에 따른 총사업비 변경

(단위 : 백만원)

총사업비			연차별투자계획				비고
			기투자	2022년
구분	당초	변경	`19~`21	당초	변경	증·감
합계	6,644	7,598	2,656	3,988	4,942	954
국비	3,322	3,799	1,328	1,994	2,471	477
시비	3,322	3,799	1,328	1,994	2,471	477

사업명

거제고현시장 해수공급시설 설치사업

담당자

생활경제과 김금비(☎639-4124)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제시 관내의 해수 사용처인 고현시장에 양질의 해수를 공급함으로서 고현시장의 관광 이미지 제고와 위생적인 수산물 보관 및 판매를 통해 지역 경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위 치 : 고현동 1024-2번지 및 거제고현시장 일원

○ 규 모 : 취수 펌프장 A=1837.8㎡, D150(2LINE) L=1.5KM

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20억원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000	74	1,508	418	-
시 도 비	1,200	44	905	251	-
시군구비	800	30	553	167	-
민간자본	50	-	50	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)

○ 2019. 08. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ 2019. 09. 경상남도 지방재정 투자심사 승인

○ 2020. 05. 기본 및 실시설계 용역

○ 2021. 02. 해역이용협의 용역

○ 2021. 03. 기본 및 실시설계 용역(변경)

○ 2021. 12. 해역이용협의 용역(변경)

○ 2021. 12. 고현시장 해수인입시설 설치공사 외 3건

○ 2022. 02. 수중모터펌프 구매설치

○ 2022. 03. 펌프장 신축공사 실시설계용역

○ 2022. 04. 펌프장 전기공사

○ 2022. 06. 해수저장조 및 부대설비 공사 외 1건

○ 2022. 07. 자동제어반 제작 설치

□ 향후계획

○ 2022. 07. 거제고현시장 해수인입 펌프장 건축공사 착공

○ 2022. 09. 거제고현시장 해수인입 펌프장 전기공사 착공

사업명

하청스포츠타운 진입도로(중로3-23호선) 개설

담당자

생활체육과 박형준(☎639-3913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하청스포츠타운 이용자들을 위한 진입도로 개설로 접근성 향상

○ 체육시설의 주변 인프라 구축으로 시설 이용자들의 이용편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 01월 ~ 2025년 04월(3년 4개월)

○ 위 치 : 하청면 실전리 645-16번지 일원(국도5호선~하청스포츠타운)

○ 규 모 : 도로개설 L=250m, B=12m(왕복 2차로)(중로3-23호선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,430	40	-	782	1,608
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,430	40	-	782	1,608
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상을 위한 지적분할측량, 5%)

○ ‘17.05.18. : 하청스포츠타운 진입도로 도시계획시설 결정

○ ‘19.07.05. : 비관리청공사 시행허가 사전협의(부산지방국토관리청)

○ ‘20.02.28. : 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경)용역 준공

○ ‘20.03.12. : 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 고시

○ ‘20.10.05. : 실시설계용역 준공

○ ‘22.01.17. : 실시계획인가 신청

○ ‘22.03.10. : 실시계획인가 고시

□ 향후계획

○ ‘22.07. : 편입토지 등 손실보상 협의 요청

○ ‘23.01. : 공사 착공

○ ‘25.04. : 공사 준공

사업명

2022년 거제장사씨름대회

담당자

생활체육과 권은경(☎639-3783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 코로나19 장기화로 인한 관광객 유인 및 지역경제 활성화 한계로 신사업       발굴 필요

○ 우리민족 고유의 스포츠인 씨름대회를 유치하여 시민들에게 다양한 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 대 회 명 : 위더스제약 2022 평화의 도시 거제 거제장사씨름대회

○ 기    간 : 2022. 3. 24. ~ 3. 29. <6일간>

○ 장    소 : 거제시체육관

○ 참가규모

- 선수단 및 임원 : 1일 270명 (연 1,620명)

- 관 람 객 : 일평균 500명 (연 3,000명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	210	-	-	210	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	210	-	-	210	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전국 방송을 통해 거제시를 홍보하고, 외부관계자의 방문으로 지역경제       활성화에 기여하며 대회를 성공적으로 개최함

□ 향후계획 : 해당사항 없음

사업명

거제스포츠파크 확장 조성사업

담당자

생활체육과 박성욱(☎639-3914)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활공원과 결합한 체육시설 조성으로 많은 시민들이 편리하게 활용

○ 규모있는 시설조성으로 각종 경기대회 및 훈련지 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ (장기추진과제로 분류)

○ 위 치 : 거제면 서정리 822-11번지 일원

○ 규 모 : 확장면적 99,140㎡(축구장 4면, 풋살구장 2면, 테니스장 8면, 숙소동 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	38,100	60	-	-	38,040
국 비	7,600	-	-	-	7,600
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	30,500	60	-	-	30,440
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 장기추진과제로 분류, 5%)

○ ‘10.09.13. : 거제스포츠파크 확장계획 수립

○ ‘10.11.05. : 중기지방재정계획 반영

○ ‘11.03.31. : 타당성조사 및 기본계획용역 발주

○ ’11.09.14. : 타당성조사 및 기본계획용역 완료

○ ‘12.11.14. : 공유재산관리계획 승인(시의회)

○ ‘13.03.19. : 중앙 지방재정 투자심사 승인

○ ‘17.03.02. : 타당성조사 및 기본계획(변경)용역 발주

○ ‘18.12.14. : 타당성조사 및 기본계획(변경)용역 완료

□ 향후계획

○ 총사업비 38,100백만원 소요로 시 재정의 과중한 부담이 불가피하여 장기

추진과제로 분류

사업명

일운체육공원 조성사업

담당자

생활체육과 박형준(☎639-3913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 균형적 체육시설 확충을 통한 지역 숙원사업 해결

○ 시민 여가활동 공간 제공으로 건강복지 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 01월 ~ 2022년 08월(10년 7개월)

○ 위 치 : 일운면 지세포리 산61-5번지 일원

○ 규 모 : 부지 30,444㎡, 체육공원 조성 1식

- 축구장, 테니스장, 풋살장, 농구장, 관리동, 본부석, 주차장, 진입도로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,199백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,199	9,119	2,680	400	-
국 비	1,100	1,100	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,499	5,419	2,680	400	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,600	2,600	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 준공단계, 98%)

○ ‘10.05.14. : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경)

○ ‘14.06.26. : 편입토지 손실보상 협의 완료

○ ‘16.03.31. : 기본계획 및 실시설계용역 완료

○ ‘17.10.30. : 경남도 지방재정 투자심사 승인(조건부)

○ ‘19.05.29. : 실시계획인가 등 인․허가 협의 완료

○ ‘19.08.12. : 공사(건축,토목,기계) 착공

○ ‘20.10.22. : 경남도 지방재정 투자심사 승인(원안가결)

○ ‘21.06.02. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청

○ ‘21.11.29. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 승인

□ 향후계획

○ ‘22.08. : 사업 준공

○ ‘22.09. : 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 승인

사업명

국공립 옥포하나어린이집 이전 신축

담당자

아동돌봄과 정문용(☎639-4973)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노화된 조라어린이집을 이전 신축함으로써 질 높은 공보육 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년

○ 위 치 : 거제시 옥포동 1509-3외 2필지

○ 규 모 : 대지면적 1,497㎡, 연면적 1,452㎡(지하1층, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,200	3,692	508	-	-
국 비	786	786	-	-	-
시 도 비	393	393	-	-	-
시군구비	693	393	300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,328	2,120	208	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 02. : 현상설계심사확정

○ 2020. 08. : 건축허가신청

○ 2021. 02. : 공사착공

○ 2022. 05. : 공사준공

○ 2022. 05. : 개원

□ 향후계획

○ 국공립어린이집 정상 운영

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 3,900백만원, 변경 4,200백만원

○ 사업규모 : 당초 대지면적 1,637㎡, 연면적 1,550㎡(지상2층)

변경 대지면적 1,497㎡, 연면적 1,452㎡(지하1층, 지상2층)

○ 사업기간 : 당초 2018. 09 ~ 2020. 07. 변경 2018. 09 ~ 2022.05.

○ 사업명 변경

- (기존) 국공립옥포조라어린이집 이전신축

- (변경) 국공립옥포하나어린이집 이전신축

- (사유) 이전 대상 어린이집 1개소(옥포어린이집) 이전반대로 조라어린이집 1개소 이전

사업명

거제시 가정행복지원센터 건립

담당자

여성가족과 김민자(☎639-4393)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가족상담·부모교육·자녀돌봄 등 가족·여성 관련 서비스를 통합적으로 지원할

수 있는 공공서비스체계 구축으로 가족기능 강화 및 건강한 가족문화 확산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 아주동 989번지

○ 규 모 : 부지면적 3,980㎡, 연면적 4,801㎡(지하 1층, 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,920	388	2,746	6,786	-
국 비	2,030	388	1,124	518	-
시 도 비	460	-	310	150	-
시군구비	7,430	-	1,312	6,118	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2021. 03. : 설계용역 완료

○ 2021. 04. ~ 06. : 설계실시 VE용역 완료

○ 2021. 08. : 착공

○ 2022. 06. : 공정율 50%

□ 향후계획

○ 2022. 06. ~ 09. : 운영 계획 수립 및 조례 제정

○ 2022. 12. : 준공

○ 2023. 02. : 개관

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모	연면적 3,980㎡(지하 1층, 지상 4층)	연면적 4801.05㎡ (지하 1층, 지상 4층)
총사업비	10,200백만원	9,920백만원
사업기간	2018. 4. ~ 2021. 8.	2018. 4. ~ 2022. 12.

사업명

아주 청소년 문화의 집 건립

담당자

여성가족과 윤경훈(☎639-4953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 간 균형 있는 청소년 활동 공간을 마련하여 청소년들의 다양한        문화욕구를 충족시키고, 건전한 여가활동 공간 제공으로 청소년 건전 육성과       보호에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 거제시 아주동 1679-7번지

○ 규 모 : 청소년 문화의 집 1동 건립(부지면적 780㎡, 연면적1,409.31㎡, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,078백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,078	21	1,530	2,527	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,900	-	-	1,900	-
시군구비	2,178	21	1,530	627	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  89%)

○ 2018. 08. : 민선7기 시장공약사업 확정

○ 2019. 06. : 지방재정 투자심사 완료

○ 2021. 07. : 설계용역 완료 및 착공

○ 2022. 06. : 공정율 89%

□ 향후계획

○ 2022. 07. ~ 08. : 운영인력 채용, 집기 구입 등 개관 준비

○ 2022. 08. ~ 09. : 준공 및 개관

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

재활용선별시설 현대화사업

담당자

자원순환과 이지탁(☎639-4824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재활용선별시설 노후 선별설비 교체 및 선별라인 재편성을 통하여

재활용선별률 향상(30%→60%)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. ~ 2022. 7.

○ 위 치 : 거제시 연초면 한내8길 95, 자원순환시설

○ 규 모 : 재활용폐기물 처리 50톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,740	-	262	4,478	-
국 비	1,422	-	79	1,343	-
시 도 비	3,318	-	183	3,135	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공공선별시설 현대화사업 신청(2020. 11.) 및 선정(2021. 03.)

○ 기본 및 실시설계 용역 계약(2021. 06.) 및 준공(2021. 10.)

○ 공사(기계, 전기, 건축 등) 입찰 및 계약 : 2022. 01. ~ 2022. 02.

○ 공사(기계, 전기, 건축 등) 착공 및 준공 : 2022. 02. ~ 2022. 06.

○ 재활용선별시설 정상가동 : 2022. 07. 11. ~

사업명

옥포국가산업단지 복합문화센터 건립

-거제시노동복지회관 리모델링 사업-

담당자

조선산업일자리과 원유진(☎639-4453)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 내 새로운 문화복합 공간을 조성을 통한 노동자 및 지역주민의 복지 증진 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 거제시 탑곡로 75(아주동)

○ 규 모 : 거제시노동복지회관 리모델링 1식

- 연면적 4,089.92㎡(지하1층/지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,418백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,418	-	5	3,013	400
국 비	2,418	-	5	2,413	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,000	-	-	600	400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 04. : 「2021년 산업단지 복합문화센터 건립사업」 공모 선정

○ 2021. 06. : 협약 체결

○ 2021. 11. : 공공건축위원회 기획 심의

○ 2021. 12. : 도시관리계획시설 중복 결정 용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 01. : 실시설계 용역 착수

○ 2022. 07. : 사업 착공

○ 2023. 06. : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2021년 ~ 2024년 / 변경 2021년 ~ 2023년

사업명

거제시립장승포도서관 재건축

담당자

평생교육과 배해현(☎055-639-3733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 삶의 질 향상을 위한 생활단위 복합문화공간 확충

○ 소통·개방형 공간 확보로 지식정보센터로서의 중추적 역할 수행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. ～ 2023. 07.

○ 위 치 : 경남 거제시 신부로36(장승포동)

○ 규 모 : 부지면적 1,728㎡, 연면적 1,431㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,600	11	221	6,368	-
국 비	2,640	11	212	2,417	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,960	-	9	3,951	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역, 5%)

○ 2020. 02. : 문화체육관광부 사업계획 변경 승인(리모델링→재건축)

○ 2020. 03. : 제1차 경상남도 지방재정투자심사

○ 2020. 05. : 2020년도 공유재산관리계획(원안가결)

○ 2020. 11. : 2021~2025 중기지방재정계획(원안가결)

○ 2021. 07. : 설계공모(안) 주민설명회

○ 2021. 11. ~ 2022. 01. : 기존건물(857㎡) 철거

○ 2021. 08. ~ 2022. 07. : 구거이설, 설계 용역 시행

○ 2022. 04. : 당초 사업비 초과(66억 → 85억)에 따른 방침 수립

□ 향후계획

○ 2022. 07. : 계약 및 착공

○ 2023. 07. : 준공 및 개관

□ 사업변경 내역

구분	당초	현재
총사업비(백만원)	6,600	6,600
사업기간	2020~2022	2020~2023
사업량	- 부지면적 1,728㎡, - 연면적 1,550㎡	- 부지면적 1,728㎡ - 연면적 1,431㎡

사업명

어촌뉴딜300사업(이수도항)

담당자

해양항만과 이종찬(☎639-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)

○ 위 치 : 경남 거제시 장목면 시방리 시방항 ~ 이수도

○ 규 모 : 시방항 및 이수도항 여객선 터미널 조성, 물양장 확장,

파제제, 어구보관창고, 어민편의시설, 해수체험장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,036백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,036	8,830	2,206	-	-
국 비	7,725	6,180	1,545	-	-
시 도 비	993	795	198	-	-
시군구비	2,318	1,855	463	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2018. 12. : 2019년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정

○ 2019. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영 및 사업 기본계획 수립·고시

○ 2020. 02. : 지역 역량강화용역 착수

○ 2020. 09. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

어촌뉴딜300사업(학동항)

담당자

해양항만과 이종찬(☎639-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)

○ 위 치 : 경남 거제시 동부면 학동리 학동항 일원

○ 규 모 : 흑진주 선착장 조성 L=140m, 몽돌힐링쉼터, 야간조명 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,402백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,402	6,705	1,697	-	-
국 비	5,867	4,693	1,174	-	-
시 도 비	755	604	151	-	-
시군구비	1,759	1,408	351	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	21	-	21	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2018. 12. : 2019년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정

○ 2019. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영 및 사업 기본계획 수립·고시

○ 2020. 02. : 지역 역량강화용역 착수

○ 2020. 09. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

어촌뉴딜300사업(도장포항)

담당자

해양항만과 이종찬(☎639-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

○ 위 치 : 경남 거제시 남부면 도장포리 도장포항 일원

○ 규 모 : 어항시설정비, 수산물 특화사업, 청소년 특화사업, 매표소 리모델링

실버카페, 바람의 쉼터, 차없는 거리, 동백숲 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,876백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,876	2,650	4,093	4,133	-
국 비	7,163	1,855	2,865	2,443	-
시 도 비	920	238	368	314	-
시군구비	2,149	557	860	732	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	644	-	-	644	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사

○ 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정

○ 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수

○ 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시

○ 2021. 07. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

어촌뉴딜300사업(산전항)

담당자

해양항만과 이종찬(☎639-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

○ 위 치 : 경남 거제시 거제면 법동리 산달도 일원

○ 규 모 : 산후항 및 실리항 어항시설 정비, 쓰레기 집하장, 바다 너울길

산달도 특화광장, 복합센터, 경로당 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,876백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,644	2,733	4,224	3,687	-
국 비	7,392	1,912	2,957	2,523	-
시 도 비	951	246	380	325	-
시군구비	2,218	575	887	756	-
지 방 채	83	-	-	83	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사

○ 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정

○ 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수

○ 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시

○ 2021. 07. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 06. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

어촌뉴딜300사업(예구항)

담당자

해양항만과 이종찬(☎639-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

○ 위 치 : 경남 거제시 일운면 와현리 예구항 ~ 내도항 일원

○ 규 모 : 내도항 및 예구항 어항시설 정비, 예구 공곶이 순례길 정비,

예구마을회관 리모델링, 내도 안길정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,606백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,606	2,484	3,827	3,295	-
국 비	6,698	1,739	2,679	2,280	-
시 도 비	861	224	344	293	-
시군구비	2,009	521	804	684	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	38	-	-	38	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사

○ 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정

○ 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수

○ 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시

○ 2021. 07. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

어촌뉴딜300사업(저구항)

담당자

해양항만과 이종찬(☎639-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

○ 위 치 : 경남 거제시 남부면 저구리 저구항 일원

○ 규 모 : 저구항 어항시설 정비, 해상 낙조공원, 특화센터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,713백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,713	2,233	3,425	3,055	-
국 비	5,995	1,563	2,398	2,034	-
시 도 비	770	201	308	261	-
시군구비	1,798	469	719	610	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	150			150	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사

○ 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정

○ 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수

○ 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시

○ 2021. 07. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 06. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

어촌뉴딜300사업(여차항)

담당자

해양항만과 이종찬(☎639-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)

○ 위 치 : 경남 거제시 남부면 다포리 여차항 일원

○ 규 모 : 소파제, 어구보관창고, 돌미역 공동작업장, 바다라운지, 돌미역

무인판매대, 마을 기반시설 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,107백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,107	-	999	1,998	2,110
국 비	3,491	-	699	1,399	1,393
시 도 비	449	-	90	180	179
시군구비	1,047	-	210	419	418
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	120	-	-	-	120
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 12. : 거제시 지방재정투자심사

○ 2020. 12. : 2021년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정

○ 2021. 02. : 2021년 3대 어촌뉴딜 선도사업 선정

○ 2021. 04. : 선도사업 공간환경 마스터플랜 수립용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 03 : 사업 기본계획 수립·고시

○ 2022. 07. : 공사 착공

○ 2023. 12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

어촌뉴딜300사업(성포항)

담당자

해양항만과 이종찬(☎639-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등

산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)

○ 위 치 : 경남 거제시 사등면 성포항 일원

○ 규 모 : 파제벽, 방파제 정비, 부잔교, 코끼리마을공유센터, 청년어부마르쉐, 코끼리카페, 성포 골목길 재생, 해안도로 경관정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,107백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,211	-	1,752	3,504	3,955
국 비	6,131	-	1,226	2,453	2,452
시 도 비	788	-	158	315	315
시군구비	1,841	-	368	736	737
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	451	-	-	-	451
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 12. : 거제시 지방재정투자심사

○ 2020. 12. : 2021년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정

○ 2021. 02. : 2021년 3대 어촌뉴딜 선도사업 선정

○ 2021. 04. : 선도사업 공간환경 마스터플랜 수립용역 착수

○ 2021. 11 : 사업 기본계획 수립·고시

□ 향후계획

○ 2022. 07. : 공사 착공

○ 2023. 12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

씨릉섬 출렁다리 조성사업

담당자

해양항만과 이승철☎639-4253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠천량 해전공원과 연계한 하청권역 관광명소개발 추진

○ 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공하고 해양공원의 기능을 최대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022 (4년간)

○ 위 치 : 하청면 연구리 산80-14번지 일원

○ 규 모 : 출렁다리 L=200m, B=2m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,910백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,910	3,350	2,460	1,100	-
국 비	250	250	-	-	-
시 도 비	1,934	985	949	-	-
시군구비	4,726	2,115	1,511	1,100	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○ 2019. 01. : 실시설계용역 착수(완료: 2020.06.)

○ 2019. 10. : 위·수탁협약 체결(한국농어촌공사 고성·통영·거제지사)

○ 2020. 05.~09. : 해역이용협의, 공유수면 점·사용, 소규모재해영향평가 협의 완료

○ 2020. 11. : 공사 착공

○ 2021. 05. : 교통약자 시설 설치를 위한 업무 협의(거제시장애인단체총연합회)

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 5,810백만원 → 변경 6,910백만원 (1,100백만원 증, 전액시비)

○ 사업기간 : 당초 2019 ~ 2021 → 변경 2019 ~ 2022

사업명

아주동 복합청사 신축공사

담당자

회계과 김영수(☎3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급속한 도시화에 따른 행정수요에 대응하고 문화시설(도서관) 건립으로      지역사회 문화발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.01.01. ~ 2021.10.31.

○ 위 치 : 경상남도 거제시 아주동 290번지 일원

○ 규 모 : 지하1~지상4층, 연면적 2,959.28㎡(주민센터+도서관)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,900	5,700	3,200	-	-
국 비	1,480	1,480	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,420	4,220	3,200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 준공 및 개관

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 준공

○ 2021. 11. : 개관

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비(80→89억원)

사업명

시청사 부설주차장 증축

담당자

회계과 김영수(☎3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정수요의 급증 및 인근 주차시설의 사업추진에 따른 예상되는 주차문      제를 해소하여 민원인에게 안정적인 서비스를 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.01.01. ~ 2021.11.18.

○ 위 치 : 경상남도 거제시 고현동 717번지

○ 규 모 : 2층3단, 연면적 5,473㎡(증 3,969㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2022년 이후
계	4,000	55	3,945	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	3,945	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 준공

□ 향후계획

○ 2021. 12. 준공

□ 사업변경 내역(해당시)